Оренбургский городской
Совет
Р Е Ш Е Н И Е 

от 15.02.2022 № 205

	

                                                                     

                                                                               

															              Проекта                                                                                      

О внесении изменений
в решение Оренбургского 
городского Совета 
от 24.12.2021 № 186

На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации,              подпункта 9 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 4 части 1 статьи 16, подпункта 6.1 части 1 статьи 17, статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502, руководствуясь пунктом 10 части 1 статьи 9, пунктом 23 части 2 статьи 27 Устава муниципального образования «город Оренбург», принятого решением Оренбургского городского Совета  от 28.04.2015  № 1015, Оренбургский городской Совет РЕШИЛ:
1.	Внести изменения в решение Оренбургского городского Совета 
от 24.12.2021 № 186 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Оренбурга на 2021-2025 годы и на период 
до 2030 года» согласно приложению.
2.	Установить, что настоящее решение Совета вступает в силу после          его официального опубликования в газете «Вечерний Оренбург».
3.	Поручить организацию исполнения решения Совета  заместителю Главы города Оренбурга по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.
4.	Возложить контроль за исполнением настоящего решения Совета                  на председателя постоянного депутатского комитета по муниципальному хозяйству Перелетова В.В.

Первый заместитель 
Главы города Оренбурга                                                                                 С.А. Салмин

Председатель 
Оренбургского городского Совета                                                             О.П. Березнева
	Приложение 
	к решению Совета
от 15.02.2022 № 205

Изменения,
вносимые в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Оренбурга на 2021 – 2025 годы и на период 
до 2030 года»

1. Изложить строку 9 паспорта программы в следующей редакции:
Объемы требуемых капитальных вложений 	Объемы и источники финансирования программы определяются 
в соответствии с утвержденными инвестиционными программами ООО «Оренбург Водоканал», Оренбургский филиал 
ПАО «Т Плюс», филиал в г. Оренбурге АО «Газпром газораспределение Оренбург» (Оренбургмежрайгаз), ОПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Оренбургэнерго»
Совокупные финансовые потребности для реализации проектов 
на период реализации Программы составляют 23 366,71 млн руб., 
в том числе:
в 2021 г. – 2468,33 млн руб.;
в 2022 г. – 4076,64 млн руб.;
в 2023 г. – 6606,14 млн руб.;
в 2024 г. – 2479,43 млн руб.;
в 2025 г. – 2093,13 млн руб.;
в 2026 г. – 1236,77 млн руб.;
в 2027 г. – 1086,25 млн руб.;
в 2028 г. – 1302,42 млн руб.;
в 2029 г. – 1249,18 млн руб.;
в 2030 г. – 768,42 млн руб.	

2. Изложить таблицу 16 раздела 3.2 в следующей редакции:

Таблица 16. Перечень мероприятий строительства, реконструкции (модернизации) систем теплоснабжения 
в муниципальном образовании «город Оренбург» на 2021-2025 годы и на период до 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования в млн руб. с НДС	годы	
		ИТОГО	собственные средства	ИТОГО	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Система теплоснабжения														
1.1	Строительство новых источников тепловой энергии														
1.1.1.	Строительство БМК для переключения потребителей котельных МЧ, Ногина, ЖСК	48,57	48,57	48,57	4,00	44,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	ПК-4 - Комплекс мероприятий по переводу тепловых нагрузок на котельную «Уральская» (строительство БМК)	80,53	80,53	80,53	0,00	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	Укрупнение и строительство одной блочно-модульной котельной вместо 2 котельных (Гаражи УВД, Трикотажная фабрика)	57,10	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	54,30	0,00	0,00	
1.1.4.	Строительство БМК (вместо 16 сущ. котельных)	253,44	253,44	253,44	23,88	62,96	10,93	155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция источников тепловой энергии														
1.2.1.	Приведение объектов мазутного 
и маслохозяйства СТЭЦ в соответствие с требованиями федеральных норм 
и правил в области ПБ	90,81	90,81	90,81	7,00	0,00	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Техническое перевооружение источников тепловой энергии														
1.3.1.	Техническое перевооружение автоматизированной системы контроля вибрации и мехвеличин на Т-60-130 
ст. № 4 «под ключ»	6,20	6,20	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	Техническое перевооружение бойлерных установок ТА ст. № 4 	10,89	10,89	10,89	0,50	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.	Техническое перевооружение бойлерных установок ТА-1,2 с заменой основных бойлеров  (5 шт.)	51,50	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	0,00	
1.3.4.	Техперевооружение коллекторной СТЭЦ	11,01	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,61	
1.3.5.	Перевод потребителей 
с централизованной системы теплоснабжения на индивидуальные источники тепловой энергии (КНР) 
в с. Краснохолм	25,86	25,86	25,86	1,39	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.6.	Перевод потребителей тепловой энергии котельных «Бердянка», «Каргала», «Нижнесакмарский», «Городище» 	46,73	46,73	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	
1.4	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки														
1.4.1.	Строительство и тех.перевооружение теплотрассы 2Ду700 от ввода 
на мкр. «им. Маршала Советского Союза Рокоссовского» в сторону Ботанического сада	104,22	104,22	104,22	3,91	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	ПК-4 - Комплекс мероприятий 
по переводу тепловых нагрузок 
на котельную «Уральская» 	671,45	671,45	671,45	309,00	199,47	162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	ПК-3 - Строительство участка ТС,  3-х ЦТП для переключения потребителей котельной ПО «СТРЕЛА»	187,50	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей														
1.5.1.	Техническое перевооружение тепломагистрали М-1 от коллекторной  (замена участка от задвижек 1М-1, 1М-3 до узла учета на границе балансовой принадлежности СТЭЦ и ОТС)	20,60	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00	1,03	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2.	Техническое перевооружение тепломагистрали  обратной сетевой воды М-1 (замена участка трубопровода от узла учета на границе балансовой принадлежности СТЭЦ и ОТС 
до задвижки ТВО-5А.)	20,60	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.	Техническое перевооружение тепломагистрали  обратной сетевой воды М-3 (замена участка трубопровода от узла учета на границе балансовой принадлежности СТЭЦ и ОТС 
до задвижки ТВО-6А.)	20,60	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	
1.5.4.	Техническое перевооружение теплотрассы М1-участок от Ст.126
 с увеличением диаметра с 2Ду900 
на 2Ду1000	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5.	Техническое перевооружение теплотрассы М1 - участок от ТК 1.44/1 до ТК 1.44/3	9,36	9,36	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.6.	Техническое перевооружение теплотрассы М1-участок от ТК 1.38 
до ТК 1.39	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.7.	Техническое перевооружение теплотрассы М1-участок от Ст. 37 
до ТК 1.8А	150,54	150,54	150,54	0,00	75,27	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.8.	Техническое перевооружение теплотрассы М4 - участок от ТК 4.46 
до ТК 4.50	45,80	45,80	45,80	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.9.	Техническое перевооружение теплотрассы М2 - участок от ТК 2.9/7/7 до ТК 3.7/17	26,84	26,84	26,84	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.10.	Техническое перевооружение теплотрассы М4 - участок от тк4.33 
до тк4.34	54,60	54,60	54,60	0,90	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.11.	Техническое перевооружение теплотрассы М3 от тк3.17А до ТК3.18	15,23	15,23	15,23	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.12.	Техническое перевооружение теплотрассы М-1 от тк1.49/2 до тк1.49/8	10,90	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.13.	Техническое перевооружение теплотрассы М4 от тк4.50/2 до тк4.50/8	38,66	38,66	38,66	1,16	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.14.	Техническое перевооружение теплотрассы М2 - участок от ТК 2.16 
до ТК 2.16/24	48,60	48,60	48,60	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.15.	Техническое перевооружение теплотрассы М-6, от тк 6.1 до тк1.17	121,40	121,40	121,40	3,64	0,00	58,88	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.16.	Техническое перевооружение теплотрассы М-1 от тк1.48/6А 
до тк1.48/10	27,04	27,04	27,04	1,04	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.17.	Техническое перевооружение теплотрассы М1 от тк1.53/30 
до тк1.53/36	12,00	12,00	12,00	0,00	0,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.18.	Техническое перевооружение теплотрассы М3 от ТК 3.15 до ТК 3.16	51,41	51,41	51,41	0,00	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.19.	Техническое перевооружение магистрального трубопровода М-3 
от ТК 3.7/15 до ТК 3.7/17	13,09	13,09	13,09	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.20.	Техническое перевооружение магистрального трубопровода М-3 
от ТК 3.7/17 – ЦТП-18	11,44	11,44	11,44	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.21.	Техническое перевооружение магистрального трубопровода М-4 
от ТК4.33 – ЦТП-34	45,26	45,26	45,26	2,71	0,00	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.22.	Перекладка магистральных ТС 
и ответвлений	1 457,29	1 457,29	1 457,29	75,36	85,82	78,60	110,05	122,72	158,28	226,24	216,04	217,32	166,86	
1.5.23.	Техническое перевооружение т/трассы «Юность»		73,90	73,90	68,23	5,67									
1.5.24.	Техническое перевооружение т/трассы «Советская»		32,75	32,75	1,64	31,11									
1.5.25.	Техническое перевооружение т/трассы «Корецкая»		22,60	22,60	1,13	21,47									
1.5.26.	Техническое перевооружение т/трассы Пролетарская,154; Парковый,8; 
т/т «Коммунаров»		19,77	19,77	0,99	18,78									
1.5.27.	Техническое перевооружение т/трассы «Советская, 15»		67,53	67,53	3,38	7,69	56,46								
1.5..28	Техническое перевооружение т/трассы «пер. Коммунальный»		21,76	21,76		1,09	11,77	8,90							
1.5.29.	Техническое перевооружение т/трассы 
к ДК «Газовик»		5,55	5,55			0,28	5,27							
1.5.30.	Техническое перевооружение т/трассы «Абдулинская»		39,00	39,00			1,95	37,05							
1.5.31.	Техническое перевооружение т/трассы кожобъединения»Урал» ЦТП-132		12,85	12,85			0,64	12,21							
1.5.32.	Техническое перевооружение т/трассы 
к школе №15		2,22	2,22			0,11	2,11							
1.5.33.	Техническое перевооружение т/трассы 
к СК «Оренбург»		6,51	6,51			0,33	6,18							
1.5.34.	Техническое перевооружение т/трасс «Ташкентская», «Струновая» 
и пр-кта Победы, 13Г		4,40	4,40			0,22	4,18							
1.5.35.	Техническое перевооружение т/трассы «5,5А квартал»		137,02	137,02			6,85	32,59	97,58						
1.5.36.	Техническое перевооружение т/трассы 
к зданию РЭС Ленининского р-на		3,40	3,40				0,17	3,23						
1.5.37.	Техническое перевооружение т/трассы «Мичуринская», школа №17		2,62	2,62				0,13	2,49						
1.5.38.	Техническое перевооружение т/трассы РОВД		2,81	2,81				0,14	2,67						
1.5.39.	Техническое перевооружение т/трассы 
к ж/д ул. Пролетарская, 308		4,44	4,44				0,22	4,22						
1.5.40.	Техническое перевооружение т/трассы 
к ж/д ул. Пролетарская, 261		1,07	1,07				0,05	1,02						
1.5.41.	Техническое перевооружение т/трассы б/к им. Пирогова		16,87	16,87				0,84	1,94	14,09					
1.5.42.	Техническое перевооружение т/трассы 
к ИТП «Баня-2»; т/т Оренбургская; мед.академия		76,48	76,48					3,82	72,66					
1.5.43.	Техническое перевооружение т/трассы «Ореана»; Б.Хмельницкого		10,07	10,07					0,50	9,57					
1.5.44.	Техническое перевооружение т/трассы «13 жил.городок»		19,11	19,11					0,96	18,15					
1.5.45.	Техническое перевооружение т/трассы «Казаковская»		12,66	12,66					0,63	12,03					
1.5.46.	Техническое перевооружение т/трассы по ул. Алтайская, 12а, 12б		19,10	19,10					0,96	18,14					
1.5.47.	Техническое перевооружение теплотрассы М-4 от ТК 4.6 до ТК 4.8		53,93	53,93					2,70	4,42	46,81				
1.5.48.	Техническое перевооружение теплотрассы М-4 от ТК 4.8 до НС№ 1		32,53	32,53						1,63	30,90				
1.5.49.	Техническое перевооружение теплотрассы ТК 2.9/7 до ТК 2.9/7/7		60,56	60,56						3,03	57,53				
1.5.50.	Техническое перевооружение теплотрассы М-2 от ШО.2.8 – ШП.2.9		15,23	15,23						0,76	14,47				
1.5.51.	Техническое перевооружение теплотрассы М-4 от ТК 4.50/16 – 
ЦТП-72		24,74	24,74						1,24	23,50				
1.5.52.	Техническое перевооружение теплотрассы М-3 от ТК 3.33 – ТК 3.35		50,95	50,95						2,55	35,83	12,57			
1.5.53.	Техническое перевооружение теплотрассы М-3 от ТК 3.7/5 – ТК 3.7/13		35,24	35,24							1,76	33,48			
1.5.54.	Техническое перевооружение теплотрассы М-3 от  ТК 3.33/15 до ст. 34		22,51	22,51							1,13	21,38			
1.5.55.	Техническое перевооружение теплотрассы М-1 от ТК 1.49/8 – 
ТК 1.49/14		22,04	22,04							1,10	20,94			
1.5.56.	Техническое перевооружение теплотрассы  М-1 от Пав.1.1 – ТК 1.12		108,22	108,22							5,41	102,81			
1.5.57.	Техническое перевооружение теплотрассы  М-4 от ТК 4.2 – ТК 4.4		156,15	156,15							7,81	17,68	130,66		
1.5.58.	Техническое перевооружение теплотрассы  М-1 от ТК1.14 – ТК 1.17		143,43	143,43								7,17	77,64	58,62	
1.5.59.	Техническое перевооружение теплотрассы  М-1 от ТК 1.53/30 – 
ТК 1.53/36		16,22	16,22									0,81	15,41	
1.5.60.	Техническое перевооружение магистрального трубопровода М-1 
от Пав.1.4 – ТК1.26/8 + ввод ЦТП-40		55,41	55,41									2,77	52,64	
1.5.61.	Техническое перевооружение  магистрального трубопровода М-1 
от ТК1.53 – ТК 1.57		38,93	38,93									2,04	36,89	
1.5.62.	Техническое перевооружение теплотрассы  М-3 от ТК 3.16 – ТК3.16/7		5,61	5,61									3,39	2,22	
1.5.63.	Техническое перевооружение магистрального трубопровода М-4
 от ТК 4.28 до ТК 4.28/4 включая ввод на ЦТП-59		1,08	1,08										1,08	
1.5.64.	Перекладка от 12 БМ ЦТП, от ЦТП, 
от квартальных ТС, от 16 котельных	1 788,77	1 788,77	1 788,77	69,24	114,91	132,07	175,48	160,18	329,24	152,87	218,23	245,37	191,18	
1.5.65.	кот. 8 квартал		25,10	25,10	25,10										
1.5.66.	кот. 9 квартал		28,76	28,76	28,76										
1.5.67.	кот. 11 квартал		73,93	73,93	15,39	58,54									
1.5.68.	кот. ГПТУ-10		51,00	51,00		51,00									
1.5.69.	кот. Школа милиции		66,06	66,06		5,37	60,69								
1.5.70.	кот. 67 городок		76,12	76,12			71,37	4,75							
1.5.71.	кот. Набережная		33,08	33,08				33,08							
1.5.72.	кот. ОГАУ		57,94	57,94				57,94							
1.5.73.	кот. Кадетский корпус		17,10	17,10				17,10							
1.5.74.	кот. СОК		5,22	5,22				5,22							
1.5.75.	кот. ЖДТ		40,01	40,01				40,01							
1.5.76.	кот. Тубдиспансер		11,77	11,77				11,77							
1.5.77.	кот. Д/С 77		29,41	29,41				5,62	23,79						
1.5.78.	кот. Дубки		109,36	109,36					109,36						
1.5.79.	кот. Победы 20		15,23	15,23					15,23						
1.5.80.	кот. Мебельная фабрика		79,17	79,17					11,80	67,37					
1.5.81.	кот. Гугучинская		90,68	90,68						90,68					
1.5.82.	кот. Мебельный комбинат		33,49	33,49						33,49					
1.5.83.	кот. Советская		65,36	65,36						65,36					
1.5.84.	кот. Харьковская		88,10	88,10						72,34	15,76				
1.5.85.	кот. ГПТУ-16		9,46	9,46							9,46				
1.5.86.	Чичерина		124,16	124,16							124,16				
1.5.87.	Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей ЦТП 8		44,47	44,47							3,49	40,98			
1.5.88.	Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей ЦТП 14		39,63	39,63								39,63			
1.5.89.	Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей ЦТП 17		41,84	41,84								41,84			
1.5.90.	Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей ЦТП 20		28,98	28,98								28,98			
1.5.91.	Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей ЦТП 26		29,88	29,88								29,88			
1.5.92.	Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей ЦТП 36		45,43	45,43								36,92	8,51		
1.5.93.	Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей ЦТП 38		5,12	5,12									5,12		
1.5.94.	Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей ЦТП 41		35,70	35,70									35,70		
1.5.95.	Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей ЦТП 45		74,07	74,07									74,07		
1.5.96.	Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей ЦТП 47		47,43	47,43									47,43		
1.5.97.	Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей ЦТП 50		21,92	21,92									21,92		
1.5.98.	Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей ЦТП 53		49,73	49,73									49,73		
1.5.99.	Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей ЦТП 54		14,98	14,98									2,87	12,11	
1.5.100.	Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей ЦТП 56		21,41	21,41										21,41	
1.5.101.	Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей ЦТП 57		21,58	21,58										21,58	
1.5.102.	Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей ЦТП 72		20,79	20,79										20,79	
1.5.103.	Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей ЦТП 75		90,04	90,04										90,04	
1.5.104.	Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей ЦТП 79		25,25	25,25										25,25	
1.5.105.	Перекладка квартальных ТС от 16 котельных	261,20	261,20	261,20	0,00	92,31	66,89	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.106.	кот. Третьяка		37,81	37,81		37,81									
1.5.107.	кот. Стройгородок		42,56	42,56		42,56									
1.5.108.	кот. БВЛ		24,70	24,70		11,94	12,76								
1.5.109.	кот. Янтарь		119,47	119,47			54,13		65,34						
1.5.110.	кот. ЖДТ		36,66	36,66					36,66						
1.6	Реконструкция центральных тепловых пунктов														
1.6.1.	Переключение потребителей котельных «Лесозащитная» и УФСИН (4 квартал) на СТЭЦ	115,81	115,81	115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	0,00	104,63	0,00	0,00	
1.6.2.	Модернизация ЦТП с заменой теплообменного оборудования	379,50	379,50	379,50	112,31	0,00	0,00	31,19	60,79	0,00	73,24	33,18	68,79	0,00	
1.6.3.	Техническое перевооружение ЦТП 79	20,37	20,37	20,37	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4.	Техническое перевооружение ЦТП 32	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.5.	Техническое перевооружение ЦТП 36	22,81	22,81	22,81	0,00	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.6.	Техническое перевооружение ЦТП 33	19,20	19,20	19,20	0,96	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Дополнительные мероприятия														
1.7.1.	Техническое перевооружение изоляции на магистральных тепловых сетях Оренбурга	90,75	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Дополнительные мероприятия из фонда содействия ЖКХ														
1.8.1	Техническое перевооружение тепловых сетей магистрального трубопровода М-1														
1.8.1.1	Техническое перевооружение т/с от М-1 пав.1.1 до ТК 1.12	152,46	152,46	152,46		6,60	145,86								
1.8.1.2	Техническое перевооружение т/с от М-1 ТК 1.42 до ТК 1.43	66,00	66,00	66,00			3,30	62,70							
1.8.1.3	Техническое перевооружение т/с от М-1 тк1.46 до тк1.48	118,32	118,32	118,32		4,80	113,52								
1.8.2	Техническое перевооружение тепловых сетей магистральных трубопроводов М-2, М-4 и М-5:														
1.8.2.1	Техническое перевооружение т/с от М-2 тк2.17/4 до ЦТП-3	97,68	97,68	97,68			4,75	92,93							
1.8.2.2	Техническое перевооружение т/с от М-4 тк4.50/12 до ЦТП 72	59,22	59,22	59,22		1,80	57,42								
1.8.2.3	Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети от Нефтемаслозавода с уменьшением протяженности	18,39	18,39	18,39		18,39									
1.8.3	Техническое перевооружение тепловых сетей магистрального трубопровода М-3:														
1.8.3.1	Техническое перевооружение т/с от М-3 тк3.1 до тк3.9 (в т.ч. ТК 3.8 - ТК 4.1)	433,80	433,80	433,80		18,00	198,00	217,80							
1.8.3.2	Техническое перевооружение т/с от М-3 тк3.16/13 до тк3.16/19	118,27	118,27	118,27		5,28	52,80	60,19							
1.8.3.3	Техническое перевооружение т/с от М-3 тк3.11/9 до ЦТП-21	36,80	36,80	36,80		1,56	35,24								
1.8.4	Техническое перевооружение тепловых сетей от котельных и ЦТП														
1.8.4.1	Техническое перевооружение тепловых сетей от котельной Карачи (от котельной до ТК 2а)	307,80	307,80	307,80		10,80	158,40	138,60							
1.8.4.2	Техническое перевооружение тепловых сетей от БМК Оренбургская	86,64	86,64	86,64		86,64									
1.8.4.3	Техническое перевооружение тепловых сетей от ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3 («ПО Стрела»)	197,52	197,52	197,52		4,80	132,00	60,72							
1.8.4.4	Техническое перевооружение тепловых сетей от ЦТП - 40 	123,60	123,60	123,60		4,80	118,80								
1.8.4.5	Техническое перевооружение тепловых сетей от ЦТП - 43	109,56	109,56	109,56			3,96	105,60							
	 ИТОГО по инвестиционной программе 	12132,78	 12 132,78   	 12 132,78   	 1 299,05   	 1 456,89   	 2 217,04   	 1 567,87   	 860,46   	 1 019,91   	 862,37   	 1 070,94   	 1 009,84   	 768,42   	

3. Дополнить раздел 5.6 абзацами следующего содержания:
«Реализация инфраструктурного проекта  «Комплексная застройка жилого района « Молодой Оренбург» (далее – жилой район «Молодой Оренбург»)
Жилой район «Молодой Оренбург» площадью в 605 га будет располагаться на северо-востоке областного центра. Проект предполагает строительство жилых домов, 29 детских садов на 300 мест, 13 школ на 1150 мест, 4 поликлиник и одной больницы. В новом районе будут проживать более 180 тысяч жителей, для которых создадут почти 6,5 тыс. рабочих мест. Создание нового городского района 
с системой общественных центров и зон притяжения, развитым транспортным 
и ландшафтно-рекреационным каркасом позволит выполнить приоритетные задачи – обеспечить высокий уровень жизни, благополучия и здоровья оренбуржцев.
Реализация проекта будет проходить поэтапно. На северо-востоке Оренбурга планируется ввести в эксплуатацию около 3,3 млн кв.м жилья и 330 тыс. кв.м коммерческой недвижимости.
Задачи проекта:
формирование систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения с учетом мощностных потребностей новой застройки;
сохранение, модернизация и реконструкция существующих городских систем и объектов инженерной инфраструктуры с учетом развития территории нового района;
использование новых методов и технологий в формировании систем, направленных на энергоэффективность и экологичность.
Описание инженерных решений:
Электроснабжение
Расчетная нагрузка перспективных объектов, предполагаемых к размещению на территории участка проектирования, составит 140,1 МВА. Существующих центров питания, способных обеспечить требуемую мощность, поблизости нет. Единственным центром питания, находящимся на территории участка, является подстанция (далее – ПС) ПС Ростоши 110/10кВ ПАО «Россети Волга»/ Филиал «Оренбургэнерго». 
Согласно данным по результатам контрольных замеров резерв данного центра питания составляет 3,17 МВА, что не позволяет использовать в перспективе  данную ПС как основной источник электроснабжения абонентов территории. Учитывая это, наиболее приоритетным вариантом обеспечения требуемой мощности электроснабжения является строительство ПС 500 кВ вблизи рассматриваемого участка с последующим понижением напряжения до 110 кВ. ПС 500 кВ предполагается подключить к существующей воздушной линии (далее – ВЛ) 500 кВ Ириклинская ГРЭС – Газовая,  с отпайкой в районе поворота ВЛ, вблизи п. Нижнесакмарский. Все ВЛ необходимо предусмотреть в двухцепном исполнении. Внешнее электроснабжение перспективных объектов будет организовано 
от ТП10/0,4 кВ, присоединенных по двухцепным кабельным линиям через РП РУ 10 кВ к новой ПС 110 кВ. На первом этапе строительства возможно подключение части объектов к ПС 110 кВ Ростоши.
Протяженность новых кабельных линий 88 км, суммарная протяженность новых линий электропередач – 11 км.
Водоснабжение
Водоснабжение территории предусматривается от двух существующих водоводов Ду 700 мм, проходящих вдоль Загородного шоссе с западной стороны. Переход на восточную сторону Загородного шоссе предполагается в районе пересечения с ул. Джангильдина, в районе гипермаркета «Лента», и ул. Автомобилистов. Два отвода (по одному от каждого из существующих водоводов) будут образовывать кольцевую сеть объединенного хозпитьевого и противопожарного водопровода. Необходимость дополнительных контррезервуаров в системе следует определить гидравлическим расчетом на стадии проектирования. В случае необходимости контррезервуаров наиболее подходящим местом для их размещения предполагается свободная территория в восточной части участка (наиболее удаленная от ввода и наиболее высокая по рельефу). 
Кольцевая сеть предполагается с резервными связями по магистральным сетям внутри участка проектирования. Суммарная нагрузка ХВС всех проектируемых объектов составит 1573 м3/ч.
Протяженность новых сетей водоснабжения составит 128 км.
Водоотведение
Ближайшая точка технологического присоединения перспективных объектов – существующий коллектор Ду 600 мм, проходящий вдоль улицы Гаранькина. Ближайшей точкой технологического присоединения перспективных объектов строительства является колодец на существующем канализационном коллекторе в районе пересечения ул. Гаранькина с ул. Салмышской. 
Ввиду благоприятного рельефа, при подключении участка в данной точке, возможно организовать полностью самотечный режим отведения стока за счет использования естественного уклона рельефа местности. Суммарный объем стока, принимаемый от перспективных абонентов (без учета притока неорганизованного стока), составит 1573 м3/ч.
Протяженность новых сетей водоотведения составит 130 км.
Теплоснабжение
Теплоснабжение объектов строительства, расположенных на участке проектирования, предполагается организовать от существующего теплоисточника – Сакмарской ТЭЦ. Основной ввод предусматривается от тепломагистрали М2. Расчетная тепловая нагрузка потребителей составит 200 Гкал/ч, в том числе отопительно-вентиляционная нагрузка 164,3 Гкал/ч и нагрузка ГВС 35,7 Гкал/ч. Для обеспечения гидравлического режима с целью увеличения циркуляции в сетевом контуре потребуется перекладка тепломагистрали М2 с 2Ду800 на2Ду 1000мм от павильона 2.2 Сакмарской ТЭЦ до ул. Автомобилистов. Кроме того, чтобы обеспечить требование СП «Котельные установки» по резервированию мощности теплоисточника (при выводе котлоагрегата наибольшей мощности), потребуется установка в котельном цехе Сакмарской ТЭЦ дополнительного водогрейного котла теплопроизводительностью 100 Гкал/ч, например КВГМ-100. Строительство насосной на тепловой магистрали Сакмарской ТЭЦ. На участке проектирования предусматривается двухтрубная, закрытая тепловая сеть с установкой в зданиях абонентов индивидуальных автоматизированных тепловых пунктов, предусматривающих погодное регулирование. Это позволит избежать в переходные периоды «перетопов», влекущих перерасход топлива на теплоисточнике.
В качестве резервного ввода предусматривается строительство участка двухтрубной тепловой сети от другой тепломагистрали Сакмарской ТЭЦ. Присоединение предполагается от участка Ду 800 мм в районе пересечения улиц Транспортной и Гаранькина. Предполагается, что в нормальном режиме данный ввод будет заполнен, но не будет обеспечивать подачу теплоносителя на рассматриваемую территорию. Его необходимость предусмотрена для повышения надежности снабжения тепловой энергией объектов участка в случае аварийной ситуации на тепломагистрали М2, чтобы не допустить «разморозки» абонентов перспективной застройки. Для повышения надежности распределительной тепловой сети внутри территории проектирования предусмотрена организация кольцевой тепловой сети с резервными связями.
Протяженность новых магистральных сетей теплоснабжения составит 15 км.
Бытовая и ливневая канализация 
Для отведения поверхностного стока с усовершенствованных водонепроницаемых покрытий участка проектирования предусмотрена дождевая канализация закрытого типа. Для отведения поверхностного стока необходимо предусмотреть очистные сооружения дождевой канализации. Сброс очищенного стока возможен только в водные объекты (сброс на рельеф запрещен). Вблизи рассматриваемой территории отсутствуют водные объекты, подходящие для сброса очищенного поверхностного стока. По этой причине необходимо строительство магистрального коллектора до очистных сооружений. 
Ввиду особенности рельефа города Оренбурга для организации самотечного режима отведения стока предлагается строительство коллектора дождевой канализации в северном направлении Загородного шоссе с последующим подключением к перспективным очистным сооружениям № 3, запланированным Генеральным планом города. Водным объектом, принимающим очищенный сток, в данном случае будет выступать оз. Камышовое.
Протяженность новых сетей ливневой и бытовой канализации составит 107 км.
Газоснабжение
Газоснабжение территории проектирования планируется осуществить путем присоединения проектируемого ГРП к существующей сети высокого давления Ду 300 мм, проходящего по территории. Газоснабжение предусматривается для подключения индивидуальных теплогенераторов торговых и бизнес центров. Распределительные сети по участку предусмотрены на среднем давлении. Суммарный прирост нагрузки для нужд отопления, вентиляции и ГВС составит 1.787 тыс.м3/ч.
Протяженность новых сетей газоснабжения составит 8,8 км.
Финансирование проекта «Молодой Оренбург»
Финансирование проекта будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге». Источниками финансирования являются областной и городской бюджеты. 
В соответствии с решением Оренбургского городского Совета от 24.12.2021               № 185 «О бюджете города Оренбурга на 2022 год и на плановый период 2023 и                     2024 годов» объем финансирования данного проекта составит 4 732 732,9 тыс. руб., в том числе:
городской бюджет – 4 732,90 тыс. руб.;
2022 год – 1 413,70 тыс. руб.;
2023 год – 3 319,20 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет – 4 728 000,00 тыс. руб.
2022 год – 1 412 200,00 тыс. руб.;
2023 год -  3 315 800,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.

Таблица 30.  Структура финансирования инфраструктурного проекта « Комплексная застройка жилого района «Молодой Оренбург»

Мероприятие/наименование источника финансирования	Всего, 
тыс. руб.
	в том числе по годам 
(тыс. руб.)	
		2022 год	2023 год	2024 год	
Общий объем финансирования программных мероприятий, 
в том числе:	4 732 732,90	1 413 613,70	3 319 119,20	0,00	
городской бюджет	4 732,90	1 413,70	3 319,20	0,00	
областной бюджет	4 728 000,00	1 412 200,00	3 315 800,00	0,00	
Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения	908 908,90	271 498,60	637 410,30	0,00	
городской бюджет	908,90	271,50	637,40	0,00	
областной бюджет	908 000,00	271 227,10	636 772,90	0,00	
Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения	1 021 021,10	304 973,00	716 048,00	0,00	
городской бюджет	1 021,10	305,00	716,10	0,00	
областной бюджет	1 020 000,00	304 668,00	715 332,00	0,00	
Технологическое присоединение к сетям электроснабжения	2 802 802,90	837 142,10	1 965 660,80	0,00	
городской бюджет	2 802,90	837,20	1 965,70	0,00	
областной бюджет	2 800 000,00	836 304,90	1 963 695,10	0,00